정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(재해위험지구정비사업) 대미 자연재해위험개선지구 정비사업
② 추진배경	○ 방림면 계촌리 대미지역에 가뭄으로 인한 농업용수 부족으로 농작물피해가 발생되고 있어 반복적인 가뭄피해 예방을 위한 용수공급 기반시설을 설치하여 농작물의 안정적인 생산으로 지역발전 기여
③ 사업개요	○ 사 업 명: 대미 자연재해위험개선지구 정비사업 ○ 위 치: 방리면 계촌2리 729번지 일원 ○ 사 업 량: 다목적 방재시설(저수지) 1개소, 저수조 6개소, 가압장 및 관로 등 ○ 사업기간: 2020. 01. ~2024. 12. ○ 총사업비: 27,100백만원 (국비13,550, 도비2,710, 군비10,840) - 연도별예산: ‘21년까지 5,000백만원, ’22년까지 2,770백만원, ‘23년이후 19,330백만원)
④ 사업부서	건설과(재해예방팀)	⑤ 담당자	심재호 과장 어성용 재해예방팀장 임재석 주무관
⑥ 선정기준	군이 발주하는 30억 이상의 예산이 투입되는 사업	⑦ 사업기간	2020.1.~2024.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 대미자연재해위험개선지구 정비사업 공사원가 사전검토 요청 (건설과-17718호)		‘22. 6. 22.	오현웅 건설과장 강신근 재해예방팀장 이민정 주무관
○ 강원도 건설기술심의 완료 (건설과-14943호)		‘22. 5. 24.	강신근 재해예방팀장 이민정 주무관
○ 설계안전성검토 및 설계VE 검토 완료		‘21. 12. ~ ’22. 3
○ 재해위험지역 정비사업 사전설계 검토 (건설과-30377호)		‘21. 11. 10.	강신근 재해예방팀장 이민정 주무관
○ 대미 자연재해위험개선지구 주민설명회(2차) (건설과-27004호)		‘21. 10. 5.	오현웅 건설과장 강신근 재해예방팀장 이민정 주무관
○ 대미자연재해위험개선지구 위수탁 협약체결 (건설과-4262호)		‘21. 2. 17.	김복기 재해예방팀장 이민정 주무관
○ 대미 자연재해위험개선지구 주민설명회(1차) (건설과-22838호)		`20. 7. 21.	김재열 안전건설과장 윤좌철 방재팀장 김선모 주무관
○ 대미 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 시행 결의 (건설과-14435호)		`20. 5. 11.	윤좌철 방재팀장 김선모 주무관