정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(청사공사및수리) 공공부문 목표관리제 탄소중립 지원(보조)
② 추진배경	○ 노후 태양광 모듈 교체 및 태양광 발전설비 신설로 청사 에너지 절감 ○ 공공부문 목표관리제 탄소중립 지원사업 선도적인 청사 탄소 중립 실현 기여
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 청사 태양광 모듈 교체 및 신설공사 ○ 위 치 : 평창군 평창읍 군청길 77(종합민원실 앞 주차장) ○ 사 업 비 : 금500,000천원(국비250,000천원, 군비250,000천원) ○ 사업기간 : 2022.03.07.~10.26. ○ 내 용 : 기존 135kW 철거 및 236.53kW 신설 (250W✕540EA➞545W✕434EA)
④ 사업부서	회계과(청사차량팀)	⑤ 담당자	권혁영 과장 한흥록 청사차량팀장 최은용 주무관
⑥ 선정기준	그 밖에 평창군수가 중점관리가 필요하다고 인정하는 사업	⑦ 사업기간	2022.03.07.~10.26.
<그간 주요 추진내용>
○ 감리용역 완료		`22. 10. 26.	권혁영 회계과장 한흥록 청사차량팀장 최은용 주무관
○ 태양광 발전설비 제작 및 설치 완료		`22. 10. 19.	권혁영 회계과장 한흥록 청사차량팀장 최은용 주무관
○ 수배전반 송수전용 MOF 설치 완료		`22. 9. 30.	권혁영 회계과장 이현연 재관관리팀장 최은용 주무관
○ 135kW 철거 및 처리 완료		‘22. 8. 30.	권혁영 회계과장 이현연 재관관리팀장 최은용 주무관
○ 폐기물처리용역 완료		‘22. 8. 30.	권혁영 회계과장 이현연 재관관리팀장 최은용 주무관
○ 실시설계 용역 완료		`22. 6. 7.	권혁영 회계과장 정태일 재관관리팀장 최은용 주무관