평창군 고시 제 2019-160호

평창군 평창읍 소재지종합정비사업

시행계획 3차 변경 고시

평창읍 소재지종합정비사업 시행계획에 대하여 농어촌정비법 제59조, 제60조 같은법 시행령 제82조 규정에 의거 다음과 같이 3차 변경 고시합니다.

2019년   8월  28일

평     창     군     수

1. 고시 내용 : 아래와 같음.

2. 관계서류 및 도서는 평창군청 도시주택과(☏ 033-330-2047) 및 평창읍

사무소 건설담당(☏ 033-330-2671)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

3. 사업시행자 : 평창군(일괄위탁 : 한국농어촌공사 원주지사)

평창읍소재지종합정비사업 시행계획변경(제3차)

2019. 8.

	평창군

평창읍소재지종합정비사업 시행계획변경(제3차)

1		사업개요

위    치 : 평창군 평창읍 중리, 하리 일원

면    적 : 310㏊(농경지 39, 임야 33, 기타 238)

가구 및 인구 : 1,679호(농가 314, 비농가 1,365),  4,239명(남 2,143, 여 2,096)

사 업 량 : 3개 분야 6개사업

❍ 기초생활기반확충

▸청소년문화센터, 지역주민어울림공간, 재래시장명품거리

❍ 지역경관개선

▸청소년특화거리, 종부교경관개선

❍ 지역역량강화

▸ 교육, 컨설팅부문, 홍보·마케팅, 정보화 구축, 마을경영지원

사 업 량 : 9,595백만원(국비 6,657, 지방비 2,853, 기타 85)

※ 자부담은 총 사업비에 미포함

사업기간 : 2014년 ~ 2019년(6년)

2		추진경위

기본계획수립 착수     : ‘14. 03. 03

기본계획협의(강원도청)  : ‘14. 12. 18

기본계획 승인(평창군)   : ‘15. 03. 23

경관형성계획 용역시행 : ‘15. 04. 23 (준공 : ’15. 12. 18)

세부설계 용역시행     : ‘15. 05. 28 (준공 : ’15. 12. 17)

시행계획 승인 및 고시 : ‘16. 03. 25 (평창군고시 제2016-29호)

❍ 지역주민어울림공간, 재래시장명품거리, 청소년특화거리 세부설계 반영

시행계획변경 승인(1차) : ‘16. 05. 26

❍ 종부교 경관개선 세부설계 반영

여건변동 승인(1차) : ‘16. 08. 03

❍ 종부교 경관개선 게이트설치 규격변경, 교량신축이음 설치 등

여건변동 승인(2차) : ‘16. 11. 15

❍ 지역주민어울림공간 및 종부교 경관개선 여건변경 반영

시행계획변경 승인(2차) : ‘17. 08. 28

❍ 청소년문화센터 세부설계 반영

여건변동 승인(3차) : ‘17. 09. 15

❍ 청소년문화센터 휀스설치, 평창교 경관조명, 청소년특화거리 물량조정,

재래시장명품거리 도막형바닥재 반영 등

여건변동 승인(4차) : ‘17. 12. 05

❍ 재배시장 명품거리 도막형바닥재 포장수량 조정 등

여건변동 승인(5차) : ‘18. 06. 08

❍ 남산체육공원 본부석 및 스탠드 캐노피 설치, 청소년특화거리 경관개선,

종부교 연결도로 석축공사, 청소년 문화센터 수량조정 등

여건변동 승인(6차) : ‘18. 10. 08

❍ 남산체육공원 본부석 및 스탠드 캐노피 조명공사, 강변공원 이동식

화장실 및 퍼걸러 설치, 청소년문화센터 화단 및 CCTV설치 등

평창읍소재지종합정비사업 보조금 이자 사용 승인 : ‘18. 10. 15

여건변동 승인(7차) : ‘19. 01. 17

❍ 평창교 경관조명공사

❍ 평창 중앙로 지중화공사 정산결과 반영(KT, SK텔레콤, CJ헬로비전) 등

3		연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	연차별 사업비 투자계획							비 고
	합계	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합 계	9,595	957	886	3,047	4,620	83	2
국 비	6,657	670	620	2,132	3,235	-	-
지 방 비	2,853	287	266	915	1,385	-	-
기타(이자)	85	-	-	-	-	83	2
민간부담	<6>	<6>	-	-	-	-	-	< > 외 서

4		시행계획변경 내용

여건변동(3차, 4차, 5차, 6차, 7차) 승인결과 반영

평창읍 지중화사업비(한국전력, LG U플러스) 정산결과 반영

(단위 : 천원)

구 분	납부	정산	증 감	비고
계	685,144	613,549	△71,595
한국전력공사	546,858	518,732	△28,126
LG U플러스	138,286	94,817	△43,469

평창읍 청소년문화관(세대공감센터) 전주이설공사비 정산결과 반영

(단위 : 천원)

구 분	납부	정산	증 감	비고
계	23,753	14,491	△9,262
전주이설공사비	23,753	14,491	△9,262

청소년문화센터(세대공감센터) BF 본인증 심의결과 반영

당 초	변 경	변경사유
-	◦ 방풍실 및 테라스 마감 ◦ 계단 헨드레일 설치	BF 본인증 심사결과 반영

청소년문화센터(세대공감센터) 내부 비품 구입

당 초	변 경	변경사유
-	◦ 가스렌지 및 가스통 설치 ◦ 소방시설 동파방지 난방기 구입 ◦ 시설관리용 컴퓨터 구입	추진위원회 요청

청소년특화거리(천변공원) 경관정비

당 초	변 경	변경사유
-	◦ 천변공원 디자인울타리 L= 224m ◦ 천변공원 옹벽 경관정비(L=54m)	추진위원회 요청

공사감리비, 사업관리비 정산결과 반영

◦ 근거 : 평창읍소재지종합정비사업 위수탁협약서 및 농어촌정비법 시행규칙 제60조

◦ 산출방법 : 농어촌정비법 시행규칙 [별표 5]

5		증감내역 및 사유

(단위:천원)

구분		기본계획	당 초 (2차)	변 경 (3차)	증 감	증감사유	비고 (변동금액 및 비율)
합 계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<5,930> 9,594,638	<△1,070> 84,638	-
H / W 사 업	청소년문화센터 및 다목적광장	4,904,000	4,417,896	3,939,810	△478,086	- 기 승인(여견변동) - BF인증 보완공사	637,690 (12.18%)
	지역주민 어울림공간	182,000	231,136	229,787	△1,349	- 기 승인(여견변동)
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	747,685	158,255	- 기 승인(여견변동)
	청소년특화거리	1,714,000	1,760,848	1,879,749	118,901	- 기 승인(여견변동) - 지중화사업비 정산결과 반영 - 천변공원 디자인울타리	353,388 (12.08%)
	종부교경관개선	731,000	1,165,286	1,399,773	234,487	- 기 승인(여견변동)
S/W 사업		<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<5,930> 385,480	<△1,070> 14,480	- 기 승인(여견변동)	14,480 (3.91%)
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-	- 기 승인(여견변동)
	세부설계비	189,000	189,000	192,185	3,185	- 기 승인(여견변동)
	공사감리비	432,000	432,000	439,957	7,957	- 공사감리비 산출결과 반영
	사업관리비	108,000	108,000	104,774	△3,226	- 사업관리비 산출결과 반영
	잡 지 출	49,000	45,404	105,438	60,034	- 청소년문화센터 공공요금 납부 - 청소년문화센터 비품구입 - 천변삼거리 옹벽 경관정비 등
	경관형성계획비	150,000	50,000	50,000	-
	일반농산어촌사업 지원비	30,000	30,000	-	△30,000	- 기 승인(여건변동)

6		사업비 수지예산서

(수입)

(단위 : 천원)

구 분	기본계획	시행계획			비고
		당 초 (A)	변 경 (B)	증△감 (B-A)
합 계	<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<5,930> 9,594,638	<△1,070> 84,000
◦ 국 비	6,657,000	6,657,000	6,657,000	-
◦ 지방비	2,853,000	2,853,000	2,853,000	-
◦ 기타(이자)	-	-	84,638	84,638
◦ 자부담	〈7,000〉	〈7,000〉	〈5,930〉	<△1,070>

(지출)

(단위 : 천원)

구 분		기본계획	시행계획			비고
			당 초 (A)	변 경 (B)	증△감 (B-A)
합 계		<7,000> 9,510,000	<7,000> 9,510,000	<5,930> 9,594,638	<△1,070> 84,638	<>:외서: 자부담
기초 생활기반	청소년문화센터 및 다목적광장	4,904,000	4,417,896	3,939,810	△478,086
	지역주민 어울림공간	182,000	231,136	229,787	△1,349
	재래시장 명품거리	530,000	589,430	747,685	158,255
지역경관개선	청소년 특화거리	1,714,000	1,760,848	1,879,749	118,901
	종부교 경관개선	731,000	1,165,286	1,399,773	234,487
역량강화	지역역량강화	<7,000> 371,000	<7,000> 371,000	<5,930> 385,480	<△1,070> 14,480
제경비	기본계획비	120,000	120,000	120,000	-
	세부설계비	189,000	189,000	192,185	3,185
	공사감리비	432,000	432,000	439,957	7,957
	사업관리비	108,000	108,000	104,774	△3,226
	잡지출	49,000	45,404	105,438	60,034
	농어촌경관형성계획	150,000	50,000	50,000	-
	일반농산어촌 사업지원비	30,000	30,000	-	△30,000

7		세부사업 변경내역

사 업 명	당 초	변 경	비고
계	6개 사업	6개 사업
청소년 문화센터	❍사업비: 4,417,896천원 ❍사업량 - 문화센터(2층 724㎡) - 태양광 발전기(20Kw) - 편의시설 1식 - 다목적광장 1,496㎡(주차장, 쉼터) - 기존건물 철거 및 석면처리	❍사업비: 3,939,810천원 ❍사업량 - 문화센터(2층 724㎡) - 태양광 발전기(20Kw) - 편의시설 1식 - 다목적광장 1,496㎡(주차장, 쉼터) - 기존건물 철거 및 석면처리 - 여건변동 승인결과 반영 □ 휀스설치 및 임시주차장 조성(3차) □ 옹벽 및 치장블록(5차) □ BF 예비인증 결과 반영(5차) □ 용지매수비용 감조정(5차, 6차) □ CCTV 설치(6차) □ 방염판넬 및 블라이더 설치(7차)
지역주민 어울림공간	❍사업비: 231,136천원 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 조경식재(250㎡) - 편의시설(파고라, 등의자 외) - 공원등 5개소 등	❍사업비: 229,787천원 ❍사업량 - 부지조성(707㎡) - 조경식재(250㎡) - 편의시설(파고라, 등의자 외) - 공원등 5개소 등 - 여건변동 승인결과 반영 □ 간접비 정산결과 반영(6차)
재래시장 명품거리	❍사업비: 589,430천원 ❍사업량 - 아스콘표층포장 : 2,391㎡ - 도막형바닥재 : 1,608㎡	❍사업비: 747,685천원 ❍사업량 - 아스콘표층포장 : 2,391㎡ - 도막형바닥재 : 1,608㎡ - 여건변동 승인결과 반영 □ 남산체육공원 캐노피 설치(5차, 6차) □ 캐노피 조명공사(6차) □ 연결도로 석축부 조명공사(7차)

사 업 명	당 초	변 경	비고
청소년 특화거리	❍사업비: 1,760,848천원 ❍사업량 - 아스콘 포장(11,800㎡) - 인조화강석블럭(2,146㎡) - 가로등 11주(LED 경관가로등)	❍사업비: 1,879,749천원 ❍사업량 - 아스콘 포장(11,800㎡) - 인조화강석블럭(2,146㎡) - 가로등 11주(LED 경관가로등) - 여건변동 승인결과 반영 □ 평창교 경관조명 공사(3차) □ 중앙로 미끄럼방지 포장(4차) □ 특화거리 울타리 경관정비(5차) □ 천변공원 이동식화장실 및 퍼걸러 (6차) □ 지중화정산결과(KT, SK, CJ) 반영 (7차) - 지중화사업비(한전, LG) 정산결과 반영 - 천변공원 디자인울타리(224m)
종부교 경관개선	❍사업비: 1,165,286천원 ❍사업량 - 야경조명시설1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설 5개소 및 조형물 등	❍사업비: 1,399,773천원 ❍사업량 - 야경조명시설 1식 - 교면포장 A=930㎡ - 편의시설 5개소 및 조형물 등 - 여건변동 승인사항 반영 □ 연결도로 옹벽블록 및 가드레일(6차) □ U형 볼라드 설치(7차)
역량강화 (S/W)	❍사업비: 371,000천원 ❍사업량 - 교육 - 컨설팅 - 홍보마케팅 - 정보화구축 - 마을경영지원	❍사업비: 385,480천원 ❍사업량 - 교육 - 컨설팅 - 홍보마케팅 - 정보화구축 - 마을경영지원 - 여건변동 승인사항 반영 □ 교육계획 변경(7차)